Типовая межотраслевая форма № КС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ  №	1	

	Коды	
Форма по ОКУД	0336001	
		Дата составления	09	01	2019	
Специализированная строительная организация	ООО "Роща"		7539645	
	по ОКПО		
Адрес	300062, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 845, 8 (4872) 255-000			

по строительству объекта	Многоэтажный многоквартирный трехподъездный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения 	
	предприятие, здание, сооружение и т.п.	

Адрес объекта	ул. Шухова в Пролетарском районе г. Тулы, дом № 28 по ГП	

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за
строительство объекта и ведение общего журнала работ	Главный инженер Копылов Леонид Дмитриевич	

Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта	ООО "Проект плюс"	
Рогов Василий Иванович	

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя (представителя
технического надзора)	ООО "Роща", генеральный директор Тарасенко Павел Дмитриевич	

Начало работ: по договору (контракту)	09.01.2019	

фактически	09.01.2019	

Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)	31.03.2020	

фактически	08.04.2020	

В настоящем журнале	23	пронумерованных и прошнурованных страниц.	

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего
журнал	Генеральный директор Носков Лев Алексеевич	

Дата выдачи, печать организации
09.01.2019

Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность, производительность,
полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ)	Многоэтажный двухсотквартирный трехподъездный жилой дом	
общей площадью 10529 м2 со встроенной парковкой на 30 парковочных мест и наружной автостоянкой на 50 парковочных мест,	
придомовой территорией 320 м2	

Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта)	Управление капитального строительства 	
города Рязани, 03.12.2018	

Субподрядные организации и выполняемые ими работы	ООО "Лемиг" - благоустройство территории, АО "Рента" - 	
отделочные работы, ООО "Стройка" - устройство стяжки	

Организации, разработавшие проектно-сметную документацию	ООО "Проект плюс"	

	

Отметки об изменениях в записях на титульном листе	-	

	

Раздел 1. Список инженерно-технического персонала, 
занятого на строительстве объекта
Фамилия, имя, отчество, 
занимаемая должность, 
участок работы	Дата начала работ 
на строительстве объекта	Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации	Дата окончания работ на строительстве объекта	
1	2	3	4	
Иванов Илья Михайлович, старший прораб, разработка котлована, монтаж строительных конструкций	09.01.2019	Квалификационный аттестат инженера № 455 от 11.12.2014 года	08.04.2020	
Козелков Андрей Иванович, инженер, монтаж строительных конструкций	29.01.2019	Удостоверение о повышении квалификации от 27.12.2018	08.04.2020	
Пименов Николай Федорович, рабочий, монтаж строительных конструкций	29.01.2019	Удостоверение о повышении квалификации от 27.12.2018	08.04.2020	
Кольцов Михаил Сергеевич, прораб транспортного участка, вывоз грунта	09.01.2019	Квалификационный аттестат инженера № 752 от 18.10.2017	31.03.2019	
...				

				

				

				

				

				

				

				

				

				

По данному образцу печатать 2-ю, 3-ю, 4-ю страницы журнала по форме № КС-6.

Раздел 2. Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций
и освидетельствования скрытых работ
Номер по порядку	Наименование актов 
(с указанием места расположения конструкций и работ)	Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших	
1	2	3	
1	Акт о разработке котлована	31.03.2019, Иванов И.М., старший прораб	
2	Акт о сборке внутренних конструкций	30.06.19, Козелков А.И., инженер	
	...		

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

По данному образцу печатать с 5-й страницы по 14-ю страницу включительно журнала по форме № КС-6.

Раздел 3. Ведомость результатов операционного контроля
и оценки качества строительно-монтажных работ
Дата	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей с указанием отметок и осей	Результаты контроля 
и оценки качества	Должности и подписи лиц, оценивающих качество работ в порядке контроля и надзора	
1	2	3	4	
1	Разработка котлована чертеж № 21 от 10.01.2019 года	Принято	Козелков А.И., инженер	
2	Затягивание кабеля КВКБШвнг 14х1,5 в трубы от стоек эстакады 116, 118, 120, 122,  в соор. 003 по проекту № 1.2.214.478/ГТП-189.12.000-А изм. 1	Принято	Иванов И.М., старший прораб	
	...			

				

				

				

				

				

				

				

				

				

По данному образцу печатать с 15-й страницы по 20-ю страницу журнала по форме № КС-6.

Раздел 4. Перечень специальных журналов работ
Наименование специального журнала 
и дата его выдачи	Организация, ведущая журнал, 
фамилия, инициалы и должность ответственного лица	Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц	
1	2	3	
Журнал работ по разработке котлована и установке распорочной системы, 01.09.2019	ООО "Реал", Иванов И.М., старший прораб	21.04.2019	
Журнал прокладки кабелей, 01.03.2019	ООО "Реал", Иванов И.М., старший прораб	31.03.2020	
...			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме № КС-6.

Раздел 5. Сведения о производстве работ
Дата	Краткое описание и условия производства работ 
(со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями, с указанием метеоусловий, отметок и осей зданий и сооружений); должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Должность и подпись 
ответственного лица, 
контролирующего ведение журнала	
1	2	3	
09.01.2019	Расчистка строительной площадки, вывоз мусора с применением средств малой механизации. Вырубка деревьев. Складирование материалов осуществляется вручную. Допуск работников к производству работ. Устройство временных ограждений. Температура в 8:00 утра    -5 °С, в 13:00 дня  -4 °С, в 17:00  -7 °С, осадков нет. Ветер СВ 2 м/с	Главный инженер Копылов Леонид Дмитриевич	
12.02.2019	Приостановка работ из-за сильных морозов и обильных осадков. Температура в 8:00 утра    -27 °С, в 13:00 дня  -29 °С, в 17:00        -27 °С, осадки в виде обильного снега. Ветер СЗ 9-10 м/с	Главный инженер Копылов Леонид Дмитриевич	
	....		

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

По данному образцу печатать с 23-й по 122-ю страницу включительно журнала по форме № КС-6.

Раздел 6. Замечания контролирующих органов и служб
Дата	Замечания контролирующих органов или ссылка на предписание, с указанием отметок и осей зданий и сооружений. 
Должность, фамилия, инициалы и подпись 
контролирующего лица	Отметки о принятии замечаний 
к исполнению и о проверке 
их выполнения	
1	2	3	

			

			

			

			

			

			

			

			

			

По данному образцу печатать с 123-й страницы по 128-ю страницы включительно журнала по форме № КС-6.
Печатать на последней странице в правом нижнем углу.

В этой книге пронумеровано и	
прошнуровано	23	страниц и	
опечатаны сургучной печатью	

М.П.	Генеральный директор 				Носков Лев Алексеевич	
	должность		подпись		расшифровка подписи	

«	08	»	апреля	20	20	г.