Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

	Код	
	Форма по ОКУД	0322006	
Заказчик	ООО "Роща", 300062, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 845, 8 (4872) 255-000		по ОКПО	12450125	
	организация, адрес, телефон, факс		по ОКПО	83612931	
Подрядчик	ООО "Стройка", 390006, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 474а, офис 52, 8 (4912) 652-852			
	организация, адрес, телефон, факс			
Стройка	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом по ул. Шухова в Пролетарском  районе г. Тулы		
	наименование, адрес		
Объект	Многоэтажный многоквартирный трехподъездный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения (№ 28 по ГП)		
	наименование	41.20	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	28	
	дата	25	12	2018	
	Вид операции		

ЖУРНАЛ
учета выполненных работ
за	2019	 год	

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)	9 323 180	 руб.	

Составил	Главный инженер				Копылов Л.Д.	
	должность		подпись		расшифровка подписи	

Проверил	Генеральный директор				Илюхин Л.А.	
	должность		подпись		расшифровка подписи	

По данному образцу печатать все четные страницы формы № КС-6а
Номер	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единич-
ной рас-
ценки	Едини-
ца из-
мере-
ния	Цена за едини-
цу, руб.	Коли-
чество работ по смете	Смет-
ная
(дого-
ворная) стои-
мость, руб.	Выполнено работ	
по по-
рядку	пози-
ции по
смете							январь	февраль	март	апрель	май	
								коли-
чество	стои-
мость,
руб.	стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.	коли-
чество	стои-
мость,
руб.	стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.	коли-
чество	стои-
мость,
руб.	стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.	коли-
чество	стои-
мость,
руб.	стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.	коли-
чество	стои-
мость,
руб.	стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	-	Устройство полусухой пескоцементной стяжки толщиной до 70 мм (с пленкой п/э)	-	м2	490.00	5200	2548000.00	1200	588000.00	588000.00	2500	1225000.00	1813000.00	1500	735000.00	2548000.00	-	-	-	-	-	-	
2	-	Монтаж термоизоляции пола 1-го этажа из материала XPS Carbon Prof 300	-	м2	390.00	960	374400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	97500.00	97500.00	120	46800.00	144300.00	
3	-	Устройство обмазочной гидроизоляции 	-	м2	240.00	1347	323280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	Устройство полусухой пескоцементной стяжки толщиной до 70 мм с монтажом шумоизоляции, толщиной 10 мм	-	м2	550.00	11050	6077500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

																							

																							

																							

																							

																							
																							
Итого	Х	Х	18557	9323180.00	1200	588000.00	588000.00	2500	1225000.00	1813000.00	1500	735000.00	2548000.00	250	97500.00	97500.00	120	46800.00	144300.00	
Накладные и прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего	Х	Х	18557	9323180.00	1200	588000.00	588000.00	2500	1225000.00	1813000.00	1500	735000.00	2548000.00	250	97500.00	97500.00	120	46800.00	144300.00	

По данному образцу печатать все нечетные страницы формы № КС-6а
Выполнено работ	
июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		2019	 год	
										
коли-
чество	стои-
мость,
руб.	стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.	коли-
чество	стои-
мость,
руб.	стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.	коли-
чество	стои-
мость,
руб.	стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.	коли-
чество	стои-
мость,
руб.	стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.	коли-
чество	стои-
мость,
руб.	стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.	коли-
чество	стои-
мость,
руб.	стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.	коли-
чество	стои-
мость,
руб.	стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.	коли-
чество	стои-
мость,
руб.	
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5200	2548000.00	
400	156000.00	300300.00	190	74100.00	374400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960	374400.00	
						956	229440.00	229440.00	391	93840.00	323280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1347	323280.00	
									520	286000.00	286000.00	-	-	-	430	223600.00	509600.00	670	368500.00	878100.00	1620	878100.00	

																							

																							

																							

																							

																							
																							
400	156000.00	300300.00	190	74100.00	374400.00	956	229440.00	229440.00	911	379840.00	609280.00	-	-	-	430	223600.00	509600.00	670	368500.00	878100.00	9127	4123780.00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	156000.00	300300.00	190	74100.00	374400.00	956	229440.00	229440.00	911	379840.00	609280.00	-	-	-	430	223600.00	509600.00	670	368500.00	878100.00	9127	4123780.00